국악 체험촌 건립사업(토목발주분) 계약심의결과

공 종	내 용	금 액
		변경전	변경후	증감
1. 단가산출서
1) 지압식 네일 가공조립 L=6.0m	노무비에서 에폭시설치수량 할증제외	151,980	151,676	▽) 304
2) 지압식 네일 가공조립 L=10.0m	노무비에서 에폭시설치수량 할증제외	181,907	181,399	▽) 508
3) 그라우팅	그라우팅 펌핑능력 30L→45L	430,632	410,716	▽)19,916
4) 덤프운반 발파암 L=0.099km/㎥	소할 15%적용→제외	7,341	6,245	▽) 1,096
5) 호안블록 노부비(인)	특별 1.05, 보통 0.13→특별 0.09, 보통 0.018	19,050	14,748	▽) 4,302
6) H-Pile 천공 로터리보링(토사)	인력 0.08→보링 0.055, 특별 0.055, 보통 0.11	39,819	30,197	▽) 9,622
7) 토류판설치	목재단위면적당 적용량 0.111㎥→0.105㎥ 3개월 요율 적용 100%→75% 설치품 형틀 0.082, 보통 0.154→0.029, 0.077+굴삭기0.02hr	66,431	42,962	▽)23,469
8) 강재손율	6개월→3개월적용 0.3→0.15 H-pile H300×300×10×15 H-pile H250×250×9×14 열연강판	25,6500 25,6500 31,3200	128,250 128,250 156,600	▽)128,250 ▽)128,250 ▽)156,600
9) 석축쌓기 찰쌓기	채움콘크리트 제외	43,655	39,918	▽) 3,737
10) 자연석 쌓기	조경공 1.04, 백호 0.684→석공 0.11 보통 0.11백호 0.43	135,051	45,064	▽) 89,987
11) 가설방음벽 방진망	손율 안봐줌→ 6개월 적용 지주 철공 0.03125→0.11, 보통 0.0625→0.11 트럭크레인 0.25→0.05 방음판 설치 철공 0.01→0.06, 보통 0.02→0.06 트럭크레인 0.04→0.1 분진망설치 비계공 0.026→0.019	805,412	155,970	▽)649,442

공 종	내 용	금 액
		변경전	변경후	증감
12) 품질시험비	콘크리트(슬럼프, 공기함유량, 공시체제작)제외 선택층, 보조기층(실내지지력, 평판재하)제외	12,659,000	7,359,000	▽) 5,300,000
13) 시공상세도	작성비 제외	24,540,098	0	▽) 24,540,098
14) 덤프운반(발파암)	발파소할제외(유압식백호+브레이크 제외)	4) 덤프운반에서 적용
15) 공사용 가설건물	면적 660→440 변경	47,388,290	31,208,430	▽) 16,179,860
16) 중기운반비	충북도청에서 영동군청 으로 변경 L=68.2km→9.8km	5,103,190	1,431,270	▽) 3,671,920
2. 자재대
1) 보조기층, 선택층	물가자료지 적용	13,000	8,000	▽) 5,000
2) 식생호안 블록		38,000	34,545	▽) 3,455
3) 강모래		23,000	22,000	▽) 1,000
4) 자연석		95,000	54,700	▽) 40,300
5) 원형맨홀뚜껑(∅648)		450,000	445,000	▽) 5,000
6) 고재대		-340	-410	▽) 70
7) 내벽판넬(1200×2400)		40,500	36,720	▽) 3,780
8) 판넬죠인바(L=2400)		6,400	5,100	▽) 1,300
9) T-Bar(L=1200)		1,500	1,275	▽) 225
10) 내벽판넬(900×2100)		107,000	91,800	▽) 15,200
11) 보통시멘트		4,200	3,900	▽) 300
12) 우수맨홀 거푸집 내외측∅900		430,000	420,000	▽) 10,000
13) 우수맨홀 거푸집 내외측∅1200		570,000	556,000	▽) 14,000
14) 외벽판넬(창)		107,000	68,340	▽) 38,660
15) 외벽판넬(철재문)		214,000	112,200	▽) 101,800
16) 각재(미송)		455,090	414,000	▽) 41,090
17) 조합페인트(흑색)		4,322	4,167	▽) 155
18) 소형고압블럭 200×100×60(회색)		8,500	7,500	▽) 1,000
19) 소형고압블럭 200×100×60(적색)		9,000	8,000	▽) 1,000
20) 투수블럭 T=60		29,700	22,000	▽) 7,700
3. 내역서
1) 제잡비 요율변경	50억 이상→ 30억∼50억 미만	5,829,000,000	5,530,120,000	▽)298,880,000